1.2.1.	Mansionario opere architettoniche complesse 
	Mansionario 
opere architettoniche complesse		Note/esempi	
1	Definizione obiettivi dell'intervento 		 	
	Colloquio con committente per capire l'obiettivo da raggiungere. 	*	Es.: Realizzazione di un intervento consistente in un nuovo edificio residenziale/ ristrutturazione per uso del committente	
				
2	Prestazioni preliminari al progetto edilizio		 	
	Verifica consistenza proprietà 	*	Acquisizione titoli di proprietà del terreno, verifica titolarità e/o comproprietà e/o presenza di problematiche con terzi confinanti, acquisizione di estratto mappa, estratto aerofotogrammetrico, …	
	Verifica di fattibilità urbanistica dell'intervento: acquisizione e verifica norme urbanistiche 	*	Estratto PGT, norme tecniche, vincoli paesistici, altri elementi condizionanti il progetto	
	Verifica eventuali altri elementi condizionanti	*	presenza elettrodotti, corsi d'acqua da cui mantenere distanze, strade,……	
				
3	Prestazioni urbanistiche (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, ecc..)	*	vedi prestazioni specialistiche	
				
4	Progetto Preliminare		 	
	Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente 	*	Numero vani, su un piano o più piani, classe energetica dell'edificio, budget di spesa …	
	Analisi ed elenco delle condizioni da considerare nel progetto 	*	Esposizione, posizione del fabbricato nel lotto, …	
	Rilievo topografico	*	vedi prestazione specialistica: rilievo di massima/strumentale/planoaltimetrico …	
	Eventuale verifica della posizione dei confini se non evidente al fine di stabilire l'effettiva estensione dell'area di proprietà	*	 	
	Prime proposte di progetto 	*	Schizzi anche a mano in planimetria, prospettive, sezioni. 	
	Confronti con il committente per messa a punto e scelta soluzione	*	Colloqui vari con committente per analisi soluzione/i preparate, messa a punto degli obbiettivi	
	Proposta progettuale di massima	*	su cad: piante, sezioni e prospetti di massima	
	Rendering	*	Primo planivolumetrico 3d, viste esterne	
	Espandibilità	*	Definire possibilità future di espansione, modifiche, vincoli...	
	Confronto con altri tecnici specialisti	*	Verifiche di fattibilità geologica, strutturale, paesistica, impianti…	

	Mansionario 
opere architettoniche complesse		Note/esempi	
4	Progetto Preliminare (segue)		 	
	Verifica fattibilità del progetto con Comune	*	Confronto con il tecnico comunale...	
	Stima sintetica dei costi di costruzione	*	Stima parametrica a mq/mc	
*	Verifiche preliminari		 	
	Verifica presso gli enti vari delle modalità autorizzative degli allacci, delle posizioni delle linee esistenti, delle modalità di allaccio	*	Contattare enti gestori acqua potabile, scarico acque nere, smaltimento acque bianche, gas di rete, energia elettrica, telefono, connessione internet, …	
				
5	Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione		(per ottenere permesso di costruire/DIA/ eventuali altre Autorizzazioni)	
	Elaborati grafici		 	
	Elementi che devono essere rappresentati negli elaborati grafici		 	
	Estratto mappa catastale	*	 	
	Estratto PGT	*	 	
	Estratto Aerofotogrammetrico	*	 	
	Estratto Carta Tecnica Regionale	*	 	
	Rilievo topografico: rielaborazione del rilevo topografico con indicazione delle sezioni realizzate, orientamento altre indicazioni utili	*	tipologia rilievo, scala di rappresentazione 1:100, 1:50	
	Rilievo dettagliato dell'immobile ed eventuali stratigrafie	*	in caso di ristrutturazione	
	Realizzazione modello tridimensionale del terreno ed eventuale foto-inserimento dell'edificio	*	per zone con vincolo paesistico o terreni in pendio	
	Sovrapposizione rilievo-Pgt e dimostrazione del dell'area edificabile disponibile	*	 	
	Sezioni di rilievo: n. …	*	Almeno due sez. (longit.-trasvers.) - indicare quante in funzione della morfologia del terreno	
	Planimetria generale: sc. 1:200	*	 	
	Piante, sezioni, prospetti di progetto	*	scale 1:100 o 1:50 in funzione della zona urbanistica 	
	Tabelle di verifica degli standard urbanistici	*	parcheggi, verde, volume, superficie coperta, indici……	
	Tabelle verifica rapporti aeroilluminanti	*	ricambi d'aria, 	
	Tabella s.u. e s.n.r 	*	 	
	Progetto schematico del verde e dei percorsi di accesso	*	Sistemazione delle eventuali aree esterne a verde, passaggi veicolari, parcheggi, …	
	Dimostrazione Volumi di scavo	*	planimetria	

	Mansionario 
opere architettoniche complesse		Note/esempi	
5	Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione (segue)		(per ottenere permesso di costruire/DIA/ eventuali altre Autorizzazioni)	
	Elaborati grafici		 	
	Elementi che devono essere rappresentati negli elaborati grafici		 	
	Planimetria con distacco edifici confinanti con relativa altezza dei fabbricati	*	acquisizione eventuali deroghe, convenzioni con terzi con atti notarili	
	Progetto accessibilità, visitabilità, adattabilità (barriere architettoniche)	*	Accessibilità, visitabilità ed adattabilità in ragione della destinazione d'uso e della tipologia edilizia	
	Progetto, elaborati grafici linee vita	*	 	
	Planimetrie scarichi 	*	richiesta parere preventivo	
	Piante, sezioni, prospetti di sovrapposizione, tavole di confronto	*	in caso di ristrutturazione	
	Elabor.grafici rappresentat. Posizionamento apparati ricezione radiotelevisivi, unità esterne condizionatori	*	Parabole, ecc.	
	Elab.grafici posizionamento pannelli solari 	*	 	
	Elab. Grafici progetto posizionamento pannelli fotovoltaici	*	 	
	Elab. Grafici sistemi di accumulo e riutilizzo acque meteoriche 	*	per eventuali usi di innaffio del verde privato	
	 		 	
	Autorizz. smaltim. acque nere		 	
	Planimetria con individuaz. Rete acque nere interne alla proprietà. Punto di consegna, opere da realizzare	*	 	
	Relazione tecnica	*	 	
	Domanda di autorizzazione	*	 	
	in alternativa per zone non servite da pubblica fognatura		 	
	Richiesta dichiarazione di zona non servita da fognatura al Comune/Ente gestore della fognatura	*	 	
	Richiesta autorizzazione scarico nel sottosuolo alla Provincia	*	 	
	Planimetria con individuazione sistemi di smaltimento	*	 	

	Mansionario 
opere architettoniche complesse		Note/esempi	
5	Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione (segue)		(per ottenere permesso di costruire/DIA/ eventuali altre Autorizzazioni)	
*	Autorizz. smaltim. acque bianche		 	
	Planimetria con individuaz. Rete di raccolta acque bianche interna alla proprietà, Punto di consegna/modalità di dispersione, opere da realizzare	*	 	
	Relazione tecnica	*	 	
	Domanda di autorizzazione	*	 	
*	Relazioni tecniche		 	
	Relazione tecnica illustrativa	*	Dati committente, individuazione proprietà, descriz. Progetto	
	Relazione sull'accessibilità, visitabilità, adattabilità (barriere architettoniche)	*	Accessibilità, visitabilità ed adattabilità in ragione della destinazione d'uso e della tipologia edilizia	
	Relazione sulla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie	*	 	
	Relazione linee vita	*	 	
*	Redazione allegati vari		 	
	Compilazione modello per domanda permesso di costruire/Dia	*	 	
	Dimostrazione della legittimità di manufatti esistenti da demolire ai fini del recupero della slp	*	estremi precedenti autorizzazioni, condoni, ecc.	
	Dichiarazione in materia di terre e rocce da scavo	*	Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 4/2008	
	Modello Istat	*	 	
	Dichiarazione di non obbligatorietà progetto VV.FF. 	*	Eventuale... se la pratica non è soggetta	
	Parere preventivo ASL o eventuale autocertificazione (in alternativa al parere ASL)	*	 	
	Eventuale autorizzazione/convenzione per deroga delle distanze minime dai confini	*	 	
	(Eventuali altri allegati) ………………………………..	*	 	
*	Documentazione fotografica		 	
	Fascicolo documentazione fotografica stato di fatto	*	 	
	Planimetria di rilievo con indicati i punti di scatto	*	 	

	Mansionario 
opere architettoniche complesse		Note/esempi	
5	Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione (segue)		(per ottenere permesso di costruire/DIA/ eventuali altre Autorizzazioni)	
*	Autorizzazione paesaggistica		 	
	2 copie elaborati grafici di progetto	*	 	
	Relazione paesaggistica 	*	completa di Documentazione fotografica e punti di scatto	
	Valutazione paesistica	*	 	
	Fotoinserimento	*	 	
	Rilievo, progetto e confronto degli alberi ad alto fusto		 	
	Rilievo, progetto e confronto dei ricevitori radiotelevisivi e degli impianti di condizionamento inseriti in facciata o sulla copertura		 	
	Indicazione grafica nell'area di pertinenza dell'edificio dei sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche previsti per gli eventuali usi di innaffio del verde privato		 	
	Elaborati grafici di progetto con il posizionamento dei pannelli fotovoltaici 		 	
	Richiesta parere ARPA		 	
	Pratica per ottenere il parere	*	Eventuale presenza terreno da bonificare/ eternit/…	
*	Calcolo oneri concessori		 	
	Calcolo oneri di urbanizzazione e contributo costo di costruzione (calcolo classe edificio)	*	 	
	Computo metrico estimativo per calcolo oneri (nel caso di ristrutturazione)	*	 	
	Dichiarazione di congruità del computo metrico estimativo delle opere	*	 	
*	Coordinamento prestazioni specialistiche e raccolta relativa documentazione		 	
	Progetto e relazione tecnica D.lgs n. 192/05 - L. 10/91 	*	vedi pratiche specialistiche	
	Progetto impianto D.M. 37/08 o dichiarazione di non obbligatorietà	*	vedi pratiche specialistiche	
	Relazione tecnica sull'acustica del fabbricato ed eventuali altri elaborati - norma di riferim.	*	vedi prestazioni specialistiche	

	Mansionario 
opere architettoniche complesse		Note/esempi	
5	Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione (segue)			
*	Coordinamento prestazioni specialistiche e raccolta relativa documentazione		 	
	Protocollo presentazione progetto VV.FF. 	*	vedi prestazioni specialistiche	
*	Eventuali altre prestazioni e documentazioni particolari		 	
	…………………………………………………………		es. inquinamento elettromagnetico	
	…………………………………………………………		 	
	…………………………………………………………		 	
	…………………………………………………………		 	
	Consegna del progetto		 	
	Illustrazione del progetto all'ufficio tecnico	*	 	
	Protocollo del progetto	*	 	
*	Copie della documentazione da produrre		 	
	3 copie complete di cui sopra + 1 copia elaborati grafici principali (2 per il Comune, 1 per lo studio, 1 copia elaborati grafici principali per cliente)	*	Oltre eventuali copie aggiuntive per vincoli/…	
				
6	Progetto Esecutivo		 	
	Disegni generali		 	
	Planimetria generale sc.1:100	*	 	
	Piante, prospetti, sezioni sc. 1:50	*	 	
	Tavole tracciamento edificio	*	 	
*	Scelta materiali da costruzione		 	
	Render interni ambienti principali		 	
	Particolari costruttivi/stratigrafie		Elaborati necessari a definire in modo compiuto le opere edili da realizzare, in scala adeguata (sc.: 1:20, 1:10, 1:5, …)	
	Piante e sezioni per inquadramento dei particolari costruttivi	*	 	
	Stratigrafia da fondo scavo a pavimento finito interrato Sc. 1:10	*	 	
	Stratigrafia solai fuoriterra Sc. 1:10	*	 	
	Stratigrafia solaio di copertura/ pensiline	*	Particolari costruttivi	
	Stratigrafia solaio terrazzo/balconi/ logge	*	Particolari costruttivi, pilette…	

	Mansionario 
opere architettoniche complesse		Note/esempi	
*	Particolari costruttivi/stratigrafie (segue)		 	
	Gronde	*	Particolari costruttivi, nodo muro-tetto, ponti termici...	
	Murature 	*	Abaco murature con stratigrafie tipo…	
	Dettagli costruttivi delle aperture	*	Dettagli costruttivi di spalle, parapetti, architravi, davanzali e soglie, …	
	Scale	*	Piante, sezioni sc. 1:20 e particolari costruttivi	
	Tavole di dettaglio dei servizi igienici	*	Posizione e tipo sanitari, sviluppo di ogni parete con posizione sanitari, miscelatori, …sviluppo di pavimenti e rivestimenti (per ogni lato)	
	Tavola di dettaglio per la cucina	*	Posizione attacchi impianti, scarichi, sviluppo di pavimenti e rivestimenti (per ogni lato), …	
	Casellario pavimenti e interni ed esterni	*	 	
	Parapetti e ringhiere	*	Particolari costruttivi	
	Comignoli 	*	Particolari costruttivi, attraversamenti, isolamenti….	
	Recinzione e cancelli	*	Piante, sezioni sc. 1:20 e particolari costruttivi	
	Controsoffitti 	*	Abaco, tipologie, quantità…	
	…………………………………………………………		 	
	Abaco serramenti (porte e finestre)		 	
	Piante di riferimento e abaco descrittivo 	*	posizione, misure, caratteristiche dei serramenti	
	 		 	
	Verifica/aggiornamento con progetti esecutivi speciali		Verifica/aggiornamento architettonico con progetto strutture, impianti, indagini geologiche …	
*	Studio forometrie		 	
	Tavole con forometrie/cavedi/… eventualmente in collaborazione con specialisti impianti	*	 	
*	Progetto esecutivo scarichi acque bianche e nere		 	
	Planimetria con tracciato tubazioni, pendenze, pozzetti, fosse, diametri, … sc. 1:100 -1:50	*	 	
	Colonne ed esalatori bagni	*	posizione, diametro	
*	Layout architettonico per impianti 		 	
	Layout per impianto elettrico	*	posizione Prese, interruttori, punti luce, …	
	Layout per impianto idraulico	*	posizione Radiatori, split raffrescamento, …	
*	Acquisizione progetti specialistici		Progetto strutture, progetto impianti, piano di sicurezza, …	
				
7	Prestazioni relative all'appalto dei lavori edili e degli altri artigiani 		 	
	Appalto opere da impresa edile		 	
	Progetto esecutivo 	*	vedi sopra	
	Capitolato prestazionale	*	 	
	Capitolato speciale d'appalto	*	 	
	Computo metrico	*	 	
	Cronoprogramma dei lavori	*	 	
	Bozza contratto d'appalto	*	 	
	Elenco prezzi unitari per categorie	*	 	
	Computo metrico estimativo dettagliato ed analitico	*	 	
*	Assistenza all'appalto		 	
	Scelta ditte da interpellare: riunione con committente	*	Mediamente verranno interpellate 3 ditte 	
	Consegna documentazione alle imprese invitate a fare l'offerta ed illustrazione dei lavori da eseguirsi	*	 	
	Redazione di tabella di confronto delle offerte ricevute	*	 	
	Esame delle offerte ricevute e verifica correttezza delle offerte, richiesta chiarimenti alle imprese, omogeneizzazione delle offerte in modo da renderle comparabili	*	Verifica errori di interpretazione, errori di calcolo, prezzi fuori ordine di grandezza, mancanza di prezzi, …	
	Confronto offerte con computo metrico estimativo inziale per la verifica di congruità	*	 	
	Riunione di presentazione al committente dei risultati e scelta dell'Impresa	*	 	
	Definizione contratto con impresa scelta (sconti, tempi, pagamenti,…) ed assistenza alla sottoscrizione	*	 	
*	Appalto opere da fabbro		vedi documenti appalto opere da impresa edile	
*	Appalto serramenti esterni		vedi documenti appalto opere da impresa edile	
*	Appalto serramenti interni		vedi documenti appalto opere da impresa edile	
*	Appalto pavimenti interni		vedi documenti appalto opere da impresa edile	
*	Appalto pavimenti esterni		vedi documenti appalto opere da impresa edile	
*	Appalto marmi e rivestimenti in pietra		vedi documenti appalto opere da impresa edile	
*	Appalto tinteggiature		vedi documenti appalto opere da impresa edile	
*	Appalto controsoffitti e cartongessi		vedi documenti appalto opere da impresa edile	
*	Appalto ascensori/elevatori		vedi documenti appalto opere da impresa edile	
*	Appalto opere da vivaista/ giardinaggio		vedi documenti appalto opere da impresa edile	
*	Appalto opere da idraulico		vedi documenti appalto opere da impresa edile	
*	Appalto opere da elettricista		vedi documenti appalto opere da impresa edile	
*	Quadro economico generale		 	
	Redazione di quadro economico riportante tutte le voci di spesa 	*	Elenco importo appalti, spese tecniche, oneri vari, …	
				
8	Gestione della costruzione e D.L.		 	
	Inizio lavori		 	
	Comunicazione di inizio lavori	*	 	
	Acquisizione notifica preliminare ASL	*	A cura del Committente	
	Richiesta sopralluogo ufficio tecnico	*	Richiesta verifica punti fissi di riferimento per quote/distanze	
	Deposito denuncia L. 1086/71	*	 	
*	Coordinamento operatori coinvolti nella costruzione		Definizione modalità di comunicazione, orari, procedure di interfaccia tra i vari operatori del cantiere, in accordo con il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione	
	aggiornamento cronoprogramma	*	 	
	coordinamento ditte appaltatrici	*	 	
	coordinamento tecnici specialisti	*	 	
*	Tracciamenti		Vedi prestazioni specialistiche topografo	
*	Direzione lavori generale - Vigilanza dei lavori		Verifica della corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato, con la regola dell'arte, con le norme vigenti	
	Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici	*	 	
	Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (mediamente 2 sopralluoghi settimanali)	*	 	
	Compilazione giornale di cantiere e redazione verbali 	*	 	
	Redazione eventuali sospensioni o proroghe	*	 	
	Redazione eventuali ordini di servizio via fax	*	 	
*	Richiesta allaccio acquedotto		 	
	Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare	*	 	
	Relazione tecnica	*	 	
	Domanda di allaccio	*	 	
	Coordinamento con tecnici Ente Gestore	*	Sopralluoghi, incontri, documentazione varia	
*	Richiesta allaccio energia elettrica		 	
	Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare	*	 	
	Relazione tecnica	*	 	
	Domanda di allaccio	*	 	
	Coordinamento con tecnici Ente Gestore	*	Sopralluoghi, incontri, documentazione varia	
*	Richiesta allaccio gas		 	
	Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare	*	 	
	Relazione tecnica	*	 	
	Domanda di allaccio	*	 	
	Coordinamento con tecnici Ente Gestore	*	Sopralluoghi, incontri, documentazione varia	
*	Richiesta allaccio telecom		 	
	Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare	*	 	
	Relazione tecnica	*	 	
	Domanda di allaccio	*	 	
	Coordinamento con tecnici Ente Gestore	*	Sopralluoghi, incontri, documentazione varia	
*	Richieste e coordinamento Enti vari		Ad esempio: Ferrovie dello Stato, ANAS, Provincia, Soprintendenza, ARPA, ASL, Consorzi vasi irrigui superficiali, ecc.	
*	Assistenza collaudo statico		 	
				
9	Contabilità dei lavori		Da quantificare separatamente per ogni ditta appaltatrice	
*	Opere da impresa edile		 	
	Valutazione e approvazione nuovi prezzi 	*	 	
	Approvazione bollettini opere in economia	*	 	
	Misurazione dei lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici	*	 	
	Redazione SAL	*	 	
	Liquidazione delle imprese	*	 	
	Registrazione pagamenti	*	 	
	Quadro economico a consuntivo	*	Compilazione di quadro economico consuntivo in base alle contabilità e alle altre voci di spesa	
	Confronto preventivi-consuntivo	*	 	
*	Opere da idraulico		vedi contabilità opere da impresa edile	
*	Opere da elettricista		vedi contabilità opere da impresa edile	
*	Serramenti esterni		vedi contabilità opere da impresa edile	
*	Serramenti interni		vedi contabilità opere da impresa edile	
*	Opere da fabbro		vedi contabilità opere da impresa edile	
*	Pavimenti interni		vedi contabilità opere da impresa edile	
*	Pavimenti esterni		vedi contabilità opere da impresa edile	
*	Marmi e rivestimenti in pietra		vedi contabilità opere da impresa edile	
*	Tinteggiature		vedi contabilità opere da impresa edile	
*	Controsoffitti e cartongessi		vedi contabilità opere da impresa edile	
*	Ascensori/piattaforme		vedi contabilità opere da impresa edile	
*	Opere di vivaista/giardinaggio		vedi contabilità opere da impresa edile	
				
10	Tutela del committente		 	
	Gestione eventuali opere non conformi		 	
	Gestione eventuali riserve da parte dell'impresa		 	
	Gestione eventuali contenziosi Committente /Impresa		 	
11	Richiesta agibilità		 	
	Redazione di documenti necessari		 	
	Comunicazione di fine lavori al Comune	*	 	
	Asseverazioni di conformità opere edili	*	 	
*	Reperimento documenti necessari		 	
	Certificato di conformità impianto riscaldamento	*	conformità al progetto, salubrità, barriere architettoniche…	
	Certificato di conformità impianto elettrico	*	Impianti elettrici, messa a terra, gas, idro termosanitario, tv…	
	Certificato di collaudo statico	*	 	
	Certificato di collaudo impianti di sollevamento	*	ascensori, montacarichi e montaauto con acquisizione numero matricola	
	Accatastamento	*	 	
	Autorizzazione allaccio fognature	*	 	
	Certificato di Prevenzione Incendi o DIA	*	 	
	Richiesta numero civico	*	 	
	 Certificazione energetica	*	 	
*	Domanda di agibilità		 	
	Redazione di domanda	*	 	
	Copie documentazione reperita 	*	vedi elenco sopra	
	Protocollo domanda	*	 	
				
12	Prestazioni specialistiche		 	
	Lavori di topografia		 	
	Rilievo	*	 	
	Tracciamento confini	*	 	
	Tracciamenti scavo e fabbricato	*	 	
	Picchettamento preventivo per scavi	*	Con strumento topografico	
	Definizione e tracciamento quote di riferimento	*	Con livello	
	Tracciamento definitivo a quota fondazioni	*	Con strumento topografico	
	Verifiche partenze muri piano interrato	*	Con strumento topografico	
	Verifica partenza muri p.terra	*	Con strumento topografico	
*	Accatastamento		 	
	Tipo mappale	*	 	
	Planimetrie catastali	*	 	
	Docfa	*	 	
	Visura finale	*	 	
*	Prestazioni urbanistiche (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, ecc..)		Vedi relativo mansionario 	
*	Strutture		Vedi relativo mansionario 	
*	Sicurezza		Vedi relativo mansionario 	
*	Impianto elettrico e speciali		Vedi relativo mansionario 	
*	Impianti idro termosanitario		Vedi relativo mansionario 	
*	Progetto isolamento acustico		Vedi relativo mansionario 	
*	Prevenzione incendi		Vedi relativo mansionario 	
*	Collaudo statico		 	
	Certificato energetico		 	
	Relazione geologica		 	
	Pratiche per contributi risparmio energetico/detrazioni fiscali		 	
	Pratiche per eventuali altri contributi		 	
	Progetto arredamento - decoro interno		 	
	Progetto piscina		 	
	Altri eventuali progetti specialistici		 	
	Rendering ad alta definizione/filmati		 	
				
13	Servizi addizionali		 	
	Varianti edilizie in corso d'opera		 	
	Varianti al progetto esecutivo con acquisizione varianti redatte dai progettisti specialisti	*	Prestazioni analoghe a quelle previste per il progetto esecutivo	
	Varianti al permesso di costruire 	*	Prestazioni analoghe a quelle previste per il progetto definitivo	
*	Assistenza alla definizione del programma di manutenzione e alla redazione del fascicolo dell'opera		 	
	Redazione fascicolo dell'opera		 	
	Documentazione ufficiale	*	DIA, permesso di costruire, varianti, agibilità, contratti per utenze, certificati impianti…	
	Raccolta originali o copie conformi	*	 	
	Verifica documenti ufficiali	*	Verifica con il costruito	
	Redazione disegni as-built opere edili	*	architettonici, strutture, fognature…	
	Disegni as-built impianti	*	Impianti elettrico e speciali (citofono, tvcc, telefono, dati, antintrusione...), meccanici, irrigazione, piscina…	
	Verifica disegni as-built impianti	*	Verifica con il costruito	
	Raccolta Manuali d'uso e manutenzione	*	Impianti, serramenti, coibenti, guaine ecc.	
	Raccolta Scorte materiali con relativo elenco e schede tecniche	*	Piastrelle, pietre, pitture, coppi…	
	Verifica in sito della corrispondenza del fascicolo dell'opera con quanto certificato dai fornitori	*	 	
				
14	Assistenza dopo la fine dei lavori		 	
	Sopralluoghi a richiesta del cliente	*	 	
	Redazione elenco eventuali difetti	*	 	
	Contatto ditte esecutrici per eliminazione difetti e coordinamento opere	*	 	
	Verifica lavori eseguiti 	*	 	
	Svincolo trattenute a garanzia	*